В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова» и в связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы, руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова            п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 
(в редакции постановлений Администрации города Иванова от 07.02.2014 № 232, 
от 26.02.2014 № 393, от 21.03.2014 № 609, от 25.04.2014 № 904, от 23.05.2014 № 1097, 
от 16.06.2014 № 1280, от 15.08.2014 № 1717, от 28.08.2014 № 1777, от 11.09.2014 № 1895,                         от 13.10.2014 № 2104, от 29.10.2014 № 2262, от 17.12.2014 № 2743, от 26.12.2014 № 2884,                 от 30.12.2014 № 2951, от 20.03.2015 № 707, от 16.06.2015 № 1252, от 17.07.2015 № 1408,                 от 06.08.2015 № 1524, от 24.09.2015 № 1861, от 13.11.2015 № 2327, от 20.11.2015 № 2351,                       от 22.12.2015 № 2612, от 29.12.2015 № 2743, от 04.03.2016 № 424, от 15.06.2016 № 1095,                 от 10.08.2016 № 1485, от 16.09.2016 № 1706, от 14.10.2016 № 1857, от 11.11.2016 № 2084,                от 24.11.2016 № 2171, от 23.12.2016 № 2418, от 29.12.2016 № 2491, от 24.03.2017 № 392,                           от 18.04.2017 № 543, от 24.05.2017 № 680, от 25.07.2017 № 994, от 23.10.2017 № 1424, 
от 25.10.2017 № 1448, от 17.11.2017 № 1591, от 07.12.2017 № 1688, от 27.12.2017 № 1842,              от 13.02.2018 № 165, от 22.03.2018 № 340, от 24.05.2018 № 672, от 23.07.2018 № 922,                  от 04.10.2018 № 1245, от 04.10.2018 № 1245, от 12.12.2018 № 1626):
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы» в строке «Объем ресурсного обеспечения Программы» в 2018 году цифры «204 856,64», «124 341,30»  заменить цифрами «233 050,87», «152 535,53» соответственно.  
1.2. Строки седьмую, одиннадцатую таблицы 7 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012,
факт	2013,
факт	2014,
факт	2015,
факт	2016, факт	2017,
факт	2018,
оценка	2019	2020	
7	Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр	тыс. кв. м
	37
480,48	39
771,16
	37
982,86
	21
346,47	5
308,95	2
706,87	5
534,19	-	-	
11	Количество отремонтированных объектов придомовых территорий	еди-ниц	236	215	318	242	95	4	29	-	-	
».
1.3. Таблицу 8 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование подпрограммы/
Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Программа, всего:	595 799,82 	475 496,54 	167 514,78 	193 050,69 	233 050,87	97 524,28 	86 053,15 	
Бюджетные ассигнования:	480 068,33 	371 211,95 	167 514,78 	193 050,69 	233 050,87	97 524,28 	86 053,15 	
- бюджет города	374 102,80 	287 057,93 	133 850,62 	150 148,69 	152 535,53	78 841,36 	73 769,47 	
- областной бюджет	89 224,40 	64 024,41 	23 214,30 	17 635,59 	76 164,51 	18 682,92 	12 283,68 	
- федеральный бюджет	16 741,13 	20 129,61 	10 449,86 	25 266,41 	4 350,83 	0,00 	- 	
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	115 731,49 	104 284,59 	- 	- 	- 	- 	- 	
1	Аналитические подпрограммы		
1.1	Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	100,00 	100,00 	90,00 	90,00 	130,00 	90,00 	90,00 	
	Бюджетные ассигнования:		100,00 	100,00 	90,00 	90,00 	130,00 	90,00 	90,00 	
	- бюджет города		100,00 	100,00 	90,00 	90,00 	130,00 	90,00 	90,00 	
	- областной бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	- федеральный бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
1.2	Аналитическая подпрограмма «Субсидирова-ние предоставления коммунальных услуг»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	125 377,31 	32 635,66 	38 216,89 	35 071,98 	86 491,84	- 	- 	
	Бюджетные ассигнования:		125 377,31 	32 635,66 	38 216,89 	35 071,98 	86 491,84	- 	- 	
	- бюджет города		125 345,31 	32 635,66 	38 216,89 	35 071,98 	86 491,84	- 	- 	
	- областной бюджет		32,00 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	- федеральный бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
1.3	Аналитическая подпрограмма «Предоставле-ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-ванных жилых помещений»	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	47 436,00 	11 039,50 	24 603,66 	24 995,19 	60 588,69	18 682,92 	12 283,68 	
	Бюджетные ассигнования:		47 436,00 	11 039,50 	24 603,66 	24 995,19 	60 588,69	18 682,92 	12 283,68 	
	- бюджет города		- 	- 	- 	- 	99,20 	- 	- 	
	- областной бюджет		38 540,70 	5 113,52 	17 922,34 	7 061,14 	60 489,49 	18 682,92 	12 283,68 	
	- федеральный бюджет		8 895,30 	5 925,98 	6 681,32 	17 934,05 	- 	- 	- 	
2	Специальные подпрограммы		
2.1	Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	202 791,04 	256 269,57 	34 374,56 	62 786,18 	34 188,55	51 331,62 	51 098,67 	
	Бюджетные ассигнования:		87 059,55 	151 984,98 	34 374,56 	62 786,18 	34 188,55	51 331,62 	51 098,67 	
	- бюджет города		62 209,97 	129 831,55 	34 374,56 	62 786,18 	34 188,55	51 331,62 	51 098,67 	
	- областной бюджет		24 849,58 	22 153,43 	- 	- 	- 	- 	- 	
	- федеральный бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	Средства Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ		115 731,49 	104 284,59 	- 	- 	- 	- 	- 	
2.2	Специальная подпрограмма «Жилище»	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	45 005,94 	56 418,47 	14 439,23 	27 013,93 	27 016,22	7 153,00 	7 294,06 	
	Бюджетные ассигнования:		45 005,94 	56 418,47 	14 439,23 	27 013,93 	27 016,22	7 153,00 	7 294,06 	
	- бюджет города		11 357,99 	14 119,15 	5 378,73 	9 107,12 	6 990,37	7 153,00 	7 294,06 	
	- областной бюджет		25 802,12 	28 095,69 	5 291,96 	10 574,45 	15 675,02 	- 	- 	
	- федеральный бюджет		7 845,83 	14 203,63 	3 768,54 	7 332,36 	4 350,83 	- 	- 	
2.3	Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-ных жилых домов и муниципального жилищного фонда»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	30 345,39 	10 170,61 	17 544,01 	17 462,94 	13 682,24	14 228,74 	14 228,74 	
	Бюджетные ассигнования:		30 345,39 	10 170,61 	17 544,01 	17 462,94 	13 682,24	14 228,74 	14 228,74 	
	- бюджет города		30 345,39 	10 170,61 	17 544,01 	17 462,94 	13 682,24	14 228,74 	14 228,74 	
	- областной бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	- федеральный бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
2.4	Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	141 957,68 	96 334,98 	31 242,71 	19 911,03 	8 645,42	- 	- 	
	Бюджетные ассигнования:		141 957,68 	96 334,98 	31 242,71 	19 911,03 	8 645,42	- 	- 	
	- бюджет города		141 957,68 	96 334,98 	31 242,71 	19 911,03 	8 645,42	- 	- 	
	- областной бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	- федеральный бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
2.5	Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»	Управление капитального строительства Администрации города Иванова	2 786,46 	3 865,98 	6 253,72 	5 719,44 	2 307,91	4 980,00 	- 	
	Бюджетные ассигнования:		2 786,46 	3 865,98 	6 253,72 	5 719,44 	2 307,91	4 980,00 	- 	
	- бюджет города		2 786,46 	3 865,98 	6 253,72 	5 719,44 	2 307,91	4 980,00 	- 	
	- областной бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 		
2.6.	Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	0,00 	8 661,77 	- 	- 	- 	- 		
	Бюджетные ассигнования:		0,00 	8 661,77 	- 	- 	- 	- 		
	- бюджет города		0,00 	0,00 	- 	- 	- 	- 		
	- областной бюджет		0,00 	8 661,77 	- 	- 	- 	- 		
	- федеральный бюджет		0,00 	- 	- 	- 	- 	- 		
2.7	Специальная подпрограмма «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города Иванова»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	- 	- 	750,00 	- 	- 	- 		
	Бюджетные ассигнования:		- 	- 	750,00 	- 	- 	- 	- 	
	- бюджет города		- 	- 	750,00 	- 	- 	- 	- 	
	- областной бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
2.8	Специальная подпрограмма «Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	- 	- 	0,00 	0,00 	0,00 	1 058,00 	1 058,00 	
	Бюджетные ассигнования:		- 	- 	0,00 	0,00 	0,00 	1 058,00 	1 058,00 	
	- бюджет города		- 	- 	0,00 	0,00 	0,00 	1 058,00 	1 058,00 	
	- областной бюджет		- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
».
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:
1.4.1. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» строку 1 таблицы 11 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012
факт	2013
факт	2014
факт	2015
факт	2016
факт	2017
факт	2018
оценка	
1	Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием  коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр	тыс. кв.м	37
480,48	39
771,16
	37
982,86
	21
346,47	5
308,95	2
706,87	5
534,19	
».
1.4.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 12 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «                                                                                                                                                                     (тыс. руб.)
№	Наименование мероприятия	Исполнитель	2014	2015	2016	2017	2018	
Подпрограмма, всего:	125 377,31	32 635,66	38 216,89	35 071,98	86 491,84	
- бюджет города	125 345,31	32 635,66	38 216,89	35 071,98	86 491,84	
- областной бюджет	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием  коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем 0,015 Гкал на 1 квадратный метр	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	95 206,24	-	-	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		95 206,24	-	-	-	-	
	- бюджет города		95 206,24	-	-	-	-	
	- областной бюджет		0,00	-	-	-	-	
2	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием  коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	-	32 635,66	38 216,89	35 071,98	86 491,84	
	Бюджетные ассигнования:		-	32 635,66	38 216,89	35 071,98	86 491,84	
	- бюджет города		-	32 635,66	38 216,89	35 071,98	86 491,84	
	- областной бюджет		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	32,00	-	-	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		32,00	-	-	-	-	
	- бюджет города		0,00	-	-	-	-	
	- областной бюджет		32,00	-	-	-	-	
4	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим на территории города Иванова поставку тепловой энергии на услуги по отоплению многоквартирных жилых домов, в целях  возмещения части затрат в виде разницы, возникшей между стоимостью приобретенной тепловой энергии и теплоносителя у организаций коммунального комплекса  и начисленной гражданам платой за отопление по установленным нормативам	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	30 139,07	-	-	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		30 139,07	-	-	-	-	
	- бюджет города		30 139,07	-	-	-	-	
	- областной бюджет		0,00	-	-	-	-	
».
1.5. Таблицу 14 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 3 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:
«
№	Наименование мероприятия	Исполнитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Подпрограмма, всего:	47 436,00	11 039,50	24 603,66	24 995,19	60 588,69	18 682,92	12 283,68	
- бюджет города	-	-	-	-	99,2	-	-	
- областной бюджет	38 540,70	5 113,52	17 922,34	7 061,14	60 489,49	18 682,92	12 283,68	
- федеральный бюджет	8 895,30	5 925,98	6 681,32	17 934,05	-	-	-	
1	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	47 436,00	11 039,50	24 603,66	24 995,19	60 489,49	18 682,92	12 283,68	
	- бюджет города Иванова		-	-	-	-	-	-		
	- областной бюджет		38 540,70	5 113,52	17 922,34	7 061,14	60 489,49	18 682,92	12 283,68	
	- федеральный бюджет		8 895,30	5 925,98	6 681,32	17 934,05	-	-	-	
2	Экспертиза предоставленных поставщиками результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова					99,20	-	-	
	- бюджет города Иванова		-	-	-	-	99,20	-	-	
».
1.6. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»: 
1.6.1. Таблицу 16 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

№	Наименование мероприятия	Исполнитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Подпрограмма, всего:	202 791,04 	256 269,57 	34 374,56 	62 786,18 	34 188,55 	51 331,62 	51 098,67 	
Бюджетные ассигнования:	87 059,55 	151 984,98 	34 374,56 	62 786,18 	34 188,55	51 331,62 	51 098,67 	
- бюджет города	62 209,97 	129 831,55 	34 374,56 	62 786,18 	34 188,55	51 331,62 	51 098,67 	
в том числе:					 				
не использованные в 2013 году средства	246,61		 					
не использованные в 2014 году средства		55 331,73						
не использованные в 2015 году средства			405,75					
не использованные в 2016 году средства				23,80				
не использованные в 2017 году средства					148,06			
- областной бюджет	24 849,58	22 153,43	-	-	-	-	-	
в том числе:								
не использованные в 2013 году средства	373,93	31,09						
не использованные в 2014 году средства		22 122,34						
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	115 731,49	104 284,59	-	-	-	-	-	
в том числе:								
не использованные в 2013 году средства	389,19	32,35						
не использованные в 2014 году средства		104 252,24						
1	Переселение граждан в приобретенные жилые помещения, всего	Управление жилищной 
политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	202 706,00	236 187,61	24 792,69	20 483,03	16 959,23	18 212,64	16 786,07	
	Бюджетные ассигнования:		86 974,51	131 903,02	24 792,69	20 483,03	16 959,23	18 212,64	16 786,07	
	- бюджет города		62 124,93	109 749,59	24 792,69	20 483,03	16 959,23	18 212,64	16 786,07	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		246,61							
	не использованные в 2014 году средства			55 331,73						
	- областной бюджет		24 849,58	22 153,43	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		373,93	31,09						
	не использованные в 2014 году средства			22 122,34						
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ		115 731,49	104 284,59	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		389,19	32,35						
	не использованные в 2014 году средства			104 252,24						
1.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		202 706,00	214 698,18	-	-	-	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		86 974,51	110 413,59	-	-	-	-	-	
	- бюджет города		62 124,93	88 260,16	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		246,61							
	не использованные в 2014 году средства			55 331,73						
	- областной бюджет		24 849,58	22 153,43	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		373,93	31,09						
	не использованные в 2014 году средства			22 122,34						
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ		115 731,49	104 284,59	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		389,19	32,35						
	не использованные в 2014 году средства			104 252,24						
1.2	Переселение граждан в приобретенные жилые помещения		-	21 489,43	24 792,69	20 483,03	16 959,23	18 212,64	16 786,07	
	Бюджетные ассигнования:		-	21 489,43	24 792,69	20 483,03	16 959,23	18 212,64	16 786,07	
	- бюджет города		-	21 489,43	24 792,69	20 483,03	16 959,23	18 212,64	16 786,07	
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
2	Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения	Управление жилищной
 политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	-	19 852,42	8 959,43	40 100,19	14 324,52	22 771,38	26 457,00	
	Бюджетные ассигнования:		-	19 852,42	8 959,43	40 100,19	14 324,52	22 771,38	26 457,00	
	- бюджет города		-	19 852,42	8 959,43	40 100,19	14 324,52	22 771,38	26 457,00	
	в том числе:									
	не использованные в 2015 году средства				405,75	 				
	не использованные в 2016 году средства					23,80				
	не использованные в 2017 году средства						148,06			
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ		-	-	-	-	-	-	-	
3	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений	Управление жилищной 
политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	25,00	219,54	29,44	27,45	46,00	75,60	167,20	
	Бюджетные ассигнования:		25,00	219,54	29,44	27,45	46,00	75,60	167,20	
	- бюджет города		25,00	219,54	29,44	27,45	46,00	75,60	167,20	
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
4	Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	50,04	-	250,00	2 175,51	2 816,00	10 272,00	7 688,40	
	Бюджетные ассигнования:		50,04	-	250,00	2 175,51	2 816,00	10 272,00	7 688,40	
	- бюджет города		50,04	-	250,00	2 175,51	2 816,00	10 272,00	7 688,40	
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
5	Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	10,00	10,00	-	-	2,80	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		10,00	10,00	-	-	2,80	-	-	
	- бюджет города		10,00	10,00	-	-	2,80	-	-	
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
6	Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах, расселяемыми в судебном порядке	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	-	-	343,00	-	-	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		-	-	343,00	-	-	-	-	
	- бюджет города		-	-	343,00	-	-	-	-	
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
7	Переселение граждан в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	-	-	-	-	-	-	-	
8	Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова	-	-	-	-	40,00	-	-	
	Бюджетные ассигнования:		-	-	-	-	40,00	-	-	
	- бюджет города		-	-	-	-	40,00	-	-	
	- областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
Необходимо учитывать риски достижения запланированных показателей в связи с изменением стоимости 1 кв. м жилья.».
1.6.2. Таблицу 16.1 «Перечень аварийных многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:
 
«
№ п/п	Адрес многоквартирного дома	
Документ, подтвержда-ющий признание многоквар-тирного дома аварийным (заключение межведомст-венной комиссии)	Планируемая дата  окончания переселения	Планируемая дата сноса многоквартирного дома	Число жителей всего	Число жителей, планируемых  к переселению	Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома	Количество расселяемых жилых помещений	Расселяемая площадь жилых помещений	Стоимость переселения граждан	Дополнительные источники финансирования	
												
								Всего:	в том числе:	Всего:	в том числе:	Всего:	в том числе за счет:	в том числе мероприятия:		
									частная собственность	муниципальная собственность		частная собственность	муниципальная собственность		средств Фонда	средств бюджета субъекта Российской Федерации	 средств местного бюджета	Переселение граждан в приобретенные жилые помещения	Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений		
																						
		Номер	Дата																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+
19 16=20+
21+22	17	18	19	20	21	22	23	
Всего по городскому округу Иваново	X	X	X	X	387	387	6 886,10	145	74	71	6 515,50	3 015,75	3 499,75	250 986,12	-	-	250 986,12	118 723,09	131 887,33	375,70	-	
 	Итого по 2015 году	X	X	X	X	56	56	1 112,00	18	8	10	962,00	435,20	526,80	41 371,86	-	-	41 371,86 	21 489,43	19 852,42	30,01	-	
1	г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 
д. 57	219	06.03
2013	4 квартал 2015	3 квартал 2016	18	18	482,10	7	1	6	396,20	67,50	328,70	15 101,93	-	-	15 101,93	12 095,72	3 002,46	3,75	-	
2	г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15	208	19.10.
2012	4 квартал 2015	3 квартал 2017	29	29	494,30	9	6	3	494,30	332,30	162,00	22 041,68	-	-	22 041,68	7 135,71	14 883,46	22,51	-	
3	г. Иваново, 
1-й пер. Чернышевского, д. 4	110	22.12.
2009	4 квартал 2015	4 квартал 2016	9	9	135,60	2	1	1	71,50	35,40	36,10	4 228,25	-	-	4 228,25	2 258,00	1 966,50	3,75	-	
 	Итого по 2016 году	X	X	X	X	49	49	818,50	19	6	13	725,50	157,40	568,10	33 375,81	-	-	33 375,81	24 792,69	8 553,68	29,44	-	
4	г. Иваново, 
ул. 9-я Минеевская,д. 45	192	27.01.
2012	4 квартал 2016	3 квартал 2017	8	8	155,50	4	1	3	155,50	33,10	122,40	6 738,83	-	-	6 738,83	5 203,22	1 530,70	4,91	-	
5	г. Иваново, ул. Колесникова, д. 18	203	25.05.
2012	4 квартал 2016	3 квартал 2017	1	1	86,20	1	1	-	16,30	16,30	-	1 080,51	-	-	1 080,51	-	1 075,60	4,91	-	
6	г. Иваново, ул. Колотилова, д. 36	191	27.01.
2012	4 квартал 2016	3 квартал 2017	29	29	410,80	9	-	9	410,80	-	410,80	17 636,03	-	-	17 636,03	17 636,03	-	-	-	
7	г. Иваново, ул. Гоголя, 
д. 8	221	22.03.
2013	4 квартал 2016	3 квартал 2017	11	11	166,00	5	4	1	142,90	108,00	34,90	7 920,44	-	-	7 920,44	1 953,44	5 947,38	19,62	-	
 	Итого по 2017 году	X	X	X	X	105	105	1 641,00	38	23	15	1 564,50	924,00	640,50	60 586,87	-	-	60 586,87	20 483,03	40 076,39	27,45	-	
8	г. Иваново, пер. 4-й Летный, д. 2	248	04.04.
2014	1 квартал 2018	2 квартал 2018 	27	27	390,70	9	4	5	366,20	170,00	196,20	9 493,56	-	-	9 493,56	2 354,62	7 133,22	5,72	-	
9	г. Иваново, 
ул. 2-я Энергетическая, 
д. 32	275	31.10.
2014	4 квартал 2017	2 квартал 2018	28	28	420,70	8	6	2	368,70	263,20	105,50	15 799,93	-	-	15 799,93	4 617,86	11 175,21	6,86	-	
10	г. Иваново, 
ул. 10-я Сосневская, 
д. 95	274	31.10.
2014	4 квартал 2017	2 квартал 2018	29	29	402,50	9	3	6	402,50	139,60	262,90	17 500,61	-	-	17 500,61	11 589,64	5 907,54	
3,43
	-	
11	г. Иваново, ул. Минская, д. 63Б	391	06.11.
2016	4 квартал 2017	4 квартал 2016	21	21	427,10	12	10	2	427,10	351,20	75,90	17 792,77	-	-	17 792,77	1 920,91	15 860,42	11,44	-	
	Итого по 2018 году	X	X	X	X	66	66	1 433,30	28	9	19	1 413,70	411,30	1 002,40	31 181,69	-	-	31 181,69	16 959,23	14 176,46	46,00	-	
12	г. Иваново, ул. Минская, д. 116	284	11.12. 2014	4 квартал 2018	2 квартал 2019	30	30	645,10	12	3	9	601,00	133,70	467,30	8 802,17	- 	-	8 802,17	3 773,00	5 011,92	17,25	-	
13	г. Иваново, ул. Минская, д. 4А	301	17.02. 2015	4 квартал 2018	2 квартал 2019	8	8	302,80	4	1	3	302,80	75,60	227,20	9 873,55	-	-	9 834,55	7 422,80	2 406,00	5,75 	-	
14	г. Иваново, ул. Чайковского, д. 19	320	15.10. 2015	4 квартал 2018	2 квартал 2019	26	26	485,40	11	4	7	485,40	177,50	307,90	11 495,53	-	-	11 495,53	5 763,43	5 709,10	23,00 	-	
15	г. Иваново, пер. 4-й Летный, д. 2 (завершение этапа переселения 2017 года)	248	04.04.
2014	1 квартал 2018	2 квартал 2018	2	2	390,70	1	1	0	24,50	24,50	0,00	1 049,44	-	-	1 049,44	- 	1 049,44	- 	-	
	Итого по 2019 году	X	X	X	X	47	47	942,00	16	9	7	910,50	511,10	399,40	41 059,62	-	-	41 059,62	18 212,64	22 771,38	75,60 	-	
16	г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 11	307	27.05.
2015	4 квартал 2019	2 квартал 2020	26	26	506,90	8	2	6	475,40	129,30	346,10	21 547,90	-	-	21 547,90	15 782,16	5 748,94 	16,80 	-	
17	г. Иваново, ул. 2-я Энергетическая, д. 30	321	15.10.
2015	4 квартал 2019	2 квартал 2020	21	21	435,10	8	7	1	435,10	381,80	53,30	19 511,72	-	-	19 511,72	2 430,48	17 022,44	58,80	-	
	Итого по 2020 году	X	X	X	X	64	64	939,3	26	19	7	939,30	576,75	362,55	43 410,27	-	-	43 410,27	16 786,07	26 457,00	167,20	-	
18	г. Иваново, 
ул. 10-я Сосневская, 
д. 93	395	14.12.
2016	4 квартал 2020	2 квартал 2021	30	30	434,80	13	11	2	434,80	339,30	95,50	20 075,07	-	-	20 075,07	4 421,65	15 556,62	96,80	-	
19	г. Иваново, 
ул. Чайковского, д. 28	398	14.12.
2016	4 квартал 2020	2 квартал 2021	34	34	504,50	13	8	5	504,50	237,45	267,05	23 335,20	-	-	23 335,20	12 364,42	10 900,38	70,40	-	
Многоквартирные дома, признанные в текущем году аварийными в связи с полученными повреждениями в результате чрезвычайной ситуации, что установлено соответствующим решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, включаются в перечень аварийных многоквартирных домов на очередной финансовый год.».

1.7. Таблицу 18 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:
«
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №	Наименование мероприятия	Исполни-тель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Подпрограмма, всего:	45 005,94	56 418,47	14 439,23	27 013,93	27 016,22	7 153,00	7 294,06	
- бюджет города	11 357,99	14 119,15	5 378,73	9 107,12	6 990,37	7 153,00	7 294,06	
в том числе:								
не использованные в 2013 году средства	2 910,50	-						
не использованные в 2014 году средства		4 088,54						
не использованные в 2015 году средства			-					
- областной бюджет	25 802,12	28 095,69	5 291,96	10 574,45	15 675,02			
в том числе:								
не использованные в 2013 году средства	7 125,30	-						
не использованные в 2014 году средства		9 473,02						
не использованные в 2015 году средства			5 291,96					
- федеральный бюджет	7 845,83	14 203,63	3 768,54	7 332,36	4 350,83			
в том числе:								
не использованные в 2013 году средства	1 030,00							
не использованные в 2014 году средства		3 373,18						
не использованные в 2015 году средства			3 768,54					
1	Обеспечение жильем молодых семей	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	32 702,14	45 502,51	13 917,44	16 243,75	10 964,83	5 649,69	
5 762,68	
	- бюджет города		9 551,78	11 482,56	5 073,80	7 659,05	4 714,45	5 649,69	5 762,68	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		2 299,24	-						
	не использованные в 2014 году средства			3 584,20						
	не использованные в 2015 году средства				-	-				
	- областной бюджет		15 304,53	19 816,32	5 075,10	1 252,34	1 899,55			
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		3 682,06	-						
	не использованные в 2014 году средства			7 520,71						
	не использованные в 2015 году средства				5 075,10					
	- федеральный бюджет		7 845,83	14 203,63	3 768,54	7 332,36	4 350,83			
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		1 030,00							
	не использованные в 2014 году средства			3 373,18						
	не использованные в 2015 году средства				3 768,54					
2	Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	12 303,80	10 915,96	403,79	10 600,18	15 894,89	1 403,31	1 431,38	
	- бюджет города		1 806,21	2 636,59	186,93	1 278,07	2 119,42	1 403,31	1 431,38	
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		611,26	-						
	не использованные в 2014 году средства			504,34						
	не использованные в 2015 году средства				-					
	- областной бюджет		10 497,59	8 279,37	216,86	9 322,11	13 775, 47			
	в том числе:									
	не использованные в 2013 году средства		3 443,24	-	-					
	не использованные в 2014 году средства			1 952,31						
	не использованные в 2015 году средства				216,86					
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-			
3	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	-	-	18,00	50,00	67,00	-		
	- бюджет города		-	-	18,00	50,00	67,00	-		
4	Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	-	-	100,00	-	-	-		
	- бюджет города		-	-	100,00	-	-	-		
5	Изготовление технической и проектной  документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	-	-	-	100,00	85,00	100,00	100,00	
	- бюджет города		-	-	-	100,00	85,00	100,00	100,00	
6	Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате противоправных действий юридических и физических лиц	Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова	-	-	-	20,00	4,50	-		
	- бюджет города		-	-	-	20,00	4,50	-		
».
1.8. В приложении 6 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:
1.8.1. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
1.8.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- предоставить субсидию на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений по 51 жилому помещению.»
1.8.1.2. Строку шестую таблицы 19 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012,
факт	2013,
факт	2014, факт	2015, факт	2016, факт	2017, факт 	2018, оценка	2019	2020	
6	Количество жилых помещений, в которых проведен комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений	единиц	-	-	-	-	-	-	45	3	3	
».
1.8.2. Таблицу 20 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№	Наименование мероприятия	Исполнитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Подпрограмма, всего:	30 345,39	10 170,61	17 544,01	17 462,94	13 682,24	14 228,74	14 228,74	
- бюджет города	30 345,39	10 170,61	17 544,01	17 462,94	13 682,24	14 228,74	14 228,74	
- областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Повышение благоустройства и улучшение эстетического облика города за счет проведения капитального ремонта фасадов с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	16 045,49	-	-	-	-	-	-	
2	Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности, и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	14 194,09	6 570,61	7 587,53	10 857,67	8 437,24	6 029,64	6 029,64	
3	Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций для определения необходимости выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, либо в отношении которых имеются решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также жилых помещений муниципального жилищного фонда	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	105,81	500,00	409,23	-	-	-	-	
4	Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений 	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	-	-	500,0	1 262,58	1 708,20	1 101,60	1 101,60	
5	Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	-	3 100,00	9 047,25	5 317,69	1 194,26	5 897,50	5 897,50	
6	Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	-	-	-	25,00	679,02	1 000,00	1 000,00	
7	Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	-	-	-	0,00	1 663,52	200,00	200,00	
».
1.9. Таблицу 21 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения 7 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:
«
№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012, факт	2013, факт	2014, факт	2015, факт	2016, факт 	2017, факт	2018, оценка	
1	Количество объектов придомовых территорий, требующих ремонта	единиц	1764	1549	1231	989 	894 	890	861	
2	Количество отремонтированных объектов придомовых территорий	единиц	236	215	318	242 	95	4	29	
».
1.10. В таблице 24 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 8 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» строки «Подпрограмма, всего:» и «- бюджет города»,                  пункт 10 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Подпрограмма, всего:	2786,46	3865,98	6253,72	5719,44	2307,91	4980,00	
- бюджет города	2786,46	3865,98	6253,72	5719,44	2307,91	4980,00	
10	Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в казну города Иванова	Управление капитального строительства Администрации города Иванова				80,02	24,00		
	- бюджет города					80,02	24,00		
	- областной бюджет								
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.